DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S/0890/2024/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČO:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx/xxxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx,  xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel 

a

BENEPRO, a.s.
se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
zastoupena ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
IČO: 26820781
DIČ: CZ26820781
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 3317  
č. účtu: xxxxx/xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxx, xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0890/2024/IO k veřejné zakázce „Zpracování PD – ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – hydroizolace spodní stavby, nová dešťová kanalizace“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0890/2024/IO ze dne 07.01.2025 k veřejné zakázce „Zpracování PD – ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – hydroizolace spodní stavby, nová dešťová kanalizace“, z důvodu požadavku objednatele na zpracování dodatečných projekčních prací, které budou spočívat ve zpracování dokumentace za účelem provedení opravy stávající areálové kanalizace v úseku od revizní šachty RŠ1 po šachtu Š4771 dle obrazové přílohy v cenové nabídce předložené zhotovitelem.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Projektová dokumentace řeší návrh nové trasy dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod ze střešních svodů a zpevněných ploch JV a SV strany historického objektu ZŠ národ. umělce P. Bezruče, na ulici tř. T.G.M. č.p. 454 ve Frýdku-Místku. Na základě provedeného monitoringu stávající areálové jednotné kanalizace u objektu školy byly zjištěny defekty, netěsnosti a zanesení původního kameninového potrubí a nemožnost napojit novou trasu dešťové kanalizace do tohoto potrubí. Dešťové vody je nutné oddělit od splaškových a pokusit se je zasakovat, nebo případně regulovat při odtoku do jednotné kanalizace. Na základě těchto zjištění se navrhuje tuto monitorovanou kanalizaci kompletně vyměnit za novou a spojit s dešťovými vodami v místě šachty Š4771. Vedle této opravené kanalizace bude provedena nová kanalizace s retenčním objektem (dle prostorových podmínek) a s regulační šachtou pro odtok dešťových vod. Obě tyto kanalizace a vody z nich se propojí do jednotné kanalizace v provozování SmVaK Ostrava v místě šachty Š4771. 

1.2.     Původní článek 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

		Jednotková cena za 1h v Kč bez DPH	počet jednotek	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH	
Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru 			78.000,-	16.380,-	94.380,-	
Inženýrská činnost k zajištění povolení záměru 			22.000,-	4.620,-	26.620,-	
Zpracování HG posudku, v případě, že bude požadován pro vydání souhlasu s napojením do kanalizace			65.000,-	13.650,-	78.650,-	
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)			68.000,-	14.280,-	82.280,-	
Autorský dozor	650,00	20	13.000,-	2.730,-	15.730,-	

Cena celkem
			246.000,-	51.660,-	
297.660,-
	
Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru – rozšíření projektu dle dodatku č. 1			34.000,00	7.140,00	41.140,00	
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – rozšíření projektu dle dodatku č. 1			30.000,00	6.300,0‬0	36.300,00	
Cena díla dle dodatku č. 1			310.000,00	65.100,00	375.100,00	

1.3	Původní článek 3. DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ se upravuje:

•	Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru vč. rozšíření projektu dle dodatku č. 1, vč. předložení vyplněné žádosti a všech požadovaných příloh do 3 měsíců ode dne účinnosti Dodatku č. 1 smlouvy o dílo,
•	projektová dokumentace pro provádění stavby vč. rozšíření projektu dle dodatku č. 1, vč. položkového rozpočtu a harmonogramu do 2 měsíců od obdržení výzvy objednatele.

1.4	Přípustnost změn
Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DPS režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku. 

*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle
 a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
 b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo
 c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 64.000,00 Kč bez DPH (26,02 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 73. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 03.06.2025.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Nacenění požadovaných prací zhotovitelem
příloha č. 2 – Situační výkres navrhované kanalizace
 
  Za objednatele						Za zhotovitele:
  Ve Frýdku-Místku                                			V Českém Těšíně

 _______                        			__________________________

  Petr Korč                                                                      Ing. Roman Hlaušek
  primátor                                                                       člen představenstva