DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0874/2024/ODaSH 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxxxx 
xxxxxxx – xxxxxxx
email: xxxxxx/ tel: xxxxxx
-	dále jen objednatel
a
Verone synergy s.r.o. 
se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo
zastoupena Ing. Jiří Muroň, jednatel
IČ: 14053349 
DIČ: CZ14053349
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl 878 27 vložka C  
č. účtu: xxxxxx/xxxxx
tel: xxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0874/2024/ODaSH k veřejné zakázce „Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
1.	Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0874/2024/ODaSH ze dne 10.01.2025 k veřejné zakázce „Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“ z důvodu navýšení rozsahu potřebných stavebních prací vůči rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.

1.1	Článek 2., Předmět smlouvy, bod 1 se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který obnáší soupis prací včetně výkazu výměr pro provedení změny montáže sloupu VO, doplnění potřebného množství chodníkových obrub (nesoulad PD se skutečností), nutnosti výkopových prací ve vyšším rozsahu kvůli ověření polohy plynovodu, úpravy výškového nesouladu chodníkového tělesa a 2 šachet nezakreslených v PD s novým stavem a požadavkem odboru životního prostřední a zemědělství na stromy vyššího obvodu kmene, než bylo řešeno v PD.

    
1.2	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	5 589 999,00 Kč	1 173 899,79 Kč	6 763 898,79 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	353 688,32 Kč	74 274,55 Kč	427 962,87 Kč	
Méněpráce dle dodatku č. 1	-83 133,10 Kč	-17 457,95 Kč	-100 591,05 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	270 555,22 Kč	56 816,60 Kč	327 371,82 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	5 860 554,22 Kč	1 230 716,39 Kč	7 091 270,61 Kč	

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 74. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24. 06. 2025.
5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1
příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vyčíslení změn 
Za objednatele:					Za zhotovitele:

_____________________________			__________________________
Petr Korč, primátor					Ing. Jiří Muroň, jednatel