DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0284/2025/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – xxxxxxx
tel.: xxxxxx / e-mail: xxxxx 
xxxxxx – xxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx/e-mail: xxxxxxxxxx
xxxxxxxx – xxxxxxx
tel.: xxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxx 
-	dále jen objednatel 
a

VIVID Stavby s.r.o.
se sídlem Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena Ing. Tomášem Vítkem, MBA
IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C87563
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx 

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0284/2025/IO ze dne 11.03.2025 k veřejné zakázce „MŠ 8. pěšího pluku – rekonstrukce elektroinstalace“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0284/2025/IO ze dne 11.03.2025 k veřejné zakázce „MŠ 8. pěšího pluku – rekonstrukce elektroinstalace“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí soupis prací pro oškrábání stěn a stropů, provedení nových omítek vápenocementových a sanačních v podrobnostech změnového listu č. 1.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	2 538 409,78 Kč	533 066,05 Kč	3 071 475,83 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 1	852 457,12 Kč	179 015,99 Kč	1 031 473,11 Kč	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 1	-12 451,88 Kč	-2 614,89 Kč	-15 066,77 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1.	840 005,24 Kč	176 401,10 Kč	1 016 406,34 Kč	
Cena dle dodatku č. 1	3 378 415,02 Kč	709 467,15 Kč	4 087 882,17 Kč 	

1.2.1.	 Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné stavební práce v režimu přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu změnového listu č. 1. 

*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle
 a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
 b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo
 c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud provedených dodatečných stavebních prací představuje částku Kč bez DPH (33,09 %) z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ, tzn. částku 9 000 000 Kč bez DPH.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 78. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.07.2025.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku                                                              Ve Frýdku-Místku

_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Ing. Tomáš Vítek, MBA
primátor                                                                           jednatel