DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0874/2024/ODaSH 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxxx 
xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx
email: xxxxxxx/ tel: xxxxxxx
-	dále jen objednatel
a
Verone synergy s.r.o. 
se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo
zastoupena Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem
IČ: 14053349 
DIČ: CZ14053349
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl 878 27 vložka C  
č. účtu: xxxxxxx/xxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0874/2024/ODaSH k veřejné zakázce „Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
1.	Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0874/2024/ODaSH ze dne 10.01.2025 k veřejné zakázce „Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“ z důvodu navýšení i snížení rozsahu potřebných stavebních prací vůči rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.

1.1	Článek 2., Předmět smlouvy, bod 1 se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 2, který obnáší soupis prací včetně výkazu výměr s dodáním billboardu s uvedením názvu firmy a informací o stavbě, dále navýšení prací z důvodu chybějící části podornice u objednatele a nutností jejího zajištění zhotovitelem, vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi parkovištěm a autobusovou zastávkou v bezprostřední blízkosti došlo k dohodě o vybudování opěrné zídky z palisád, kvůli dostatečnému ověření únosnosti bylo zadáno provedení dalších 4 statických zatěžovacích zkoušek, zhotovitel dále převezl ornici ze skládky objednatele a rozprostřel ji. Jako méněpráce vznikly práce se zajištěním materiálu – ornice zhotovitelem (zajištěna byla objednatelem z vlastního skladu), z důvodu neprovádění přeložky plynovodu a v místech, kde by byl problematický růst zeleně, byla část ornice nahrazena kačírkem pro okapový chodník (styk dvou parkovištních ploch a mezi palisádami a obrubníkem).

1.2	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle SoD	5 589 999,00 Kč	1 173 899,79 Kč	6 763 898,79 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	5 860 554,22 Kč	1 230 716,39 Kč	7 091 270,61 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	204 697,02 Kč	42 986,37 Kč	247 683,39 Kč	
Méněpráce dle dodatku č. 2	- 390 379,00 Kč	- 81 979,59 Kč	- 472 358,59 Kč	
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 2	- 185 681,98 Kč	- 38 993,22 Kč	- 224 675,20 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 2	5 674 872,24 Kč	1 191 723,17 Kč	6 866 595,41 Kč	

1.3	Změna smlouvy dle Dodatku č. 2 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to:
a)	dílem dle § 222 odst. 4 odst. ZZVZ* v položkách 9, 10, 11, 12, 13, 14, a 16 dle Rekapitulace ve Změnovém listu č. 2, neboť hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu všech dodatečných a neprováděných prací činí 4,35 % oproti původní ceně díla, tj. nepřekračuje limit změny de minimis, tj. 15 % původní hodnoty závazku,
b)	dílem dle § 222 odst. 6 ZZVZ** v položce č. 15 dle Rekapitulace ve Změnovém listu č. 2, neprovedení přeložky plynovodu, když tato položka byla v projektu zohledněna jako podmíněná v závislosti na skutečném ověření hloubky a skutečného umístění plynovodu v terénu.

*Dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

**Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 19. 08. 2025.
5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 2
příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vyčíslení změn 
Za objednatele:					Za zhotovitele:

__________________________			__________________________
Petr Korč, primátor					Ing. Jiří Muroň, jednatel