Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S/0646/2025/IO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČO: 00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxx – xxxxxxx
tel: xxxxxxx / e-mail: xxxxxxx

xxxxxx, xxxxxxx, 
tel: xxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxx
                                           
-	dále jen objednatel

a

společnost „DAV – STAV MORAVIA – kino P. Bezruče“ 
se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
zastoupena Ing. Matoušem Hábou, členem představenstva, na základě Smlouvy o společnosti 

vedoucí společník: DAV, a.s. 
se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
zastoupena Ing. Matoušem Hábou, členem představenstva 
IČO: 00575381 
DIČ: CZ00575381 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 81 
ID datové schránky: sj4t66n 

a

společník: STAV MORAVIA spol. s r. o. 
se sídlem Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava 
zastoupena Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti 
IČO: 47977655 
DIČ: CZ47977655 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 5699 
ID datové schránky: 4ujsmmy 

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxx
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Matouš Hába, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: xxxxxxx
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo                                 č. S/0646/2025/IO pod názvem „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče na parkovací stání“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva nebo dodatek).

1.	Předmět dodatku

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděného díla v následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0646/2025/IO ze dne 21.07.2025 k veřejné zakázce „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče na parkovací stání“.

2.	Strany sjednávají, že článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se v bodě 2.2. Stavební program doplňuje o následující ujednání:

2.1.	Stávající rozsah Stavebního programu je dle článku 2. odst. 2.2. Smlouvy pod písm. a) až h) zachován s těmito odchylkami:
a)	oproti požadavku Stavebního programu na demolici budovy čp. 612, do úrovně prvého nadzemního podlaží, provede zhotovitel demolici budovy v projekční a realizační fázi až do úrovně stávajícího suterénu, a této změně přizpůsobí tomu odpovídající terénní úpravy dotčených okolních pozemků z hlediska zabezpečení parkovacího stání vysvahováním, odvodněním, dopravním napojením na stávající parkoviště a dalších požadavků Stavebního programu;
b)	oproti požadavku Stavebního programu na zachování zásobování vodou objektu bez č.p. na pozemku 3482/69 v k.ú. Místek (vinotéka) vedoucí přes suterén budovy, provede v této části pouze projektovou fázi, tj. odpovídající projektovou dokumentaci a realizační fázi provede objednatel.

3.	Důvod a přípustnost změn dle § 222 ZZVZ

Tato změna rozsahu předmětu díla dle smlouvy je přípustná ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ)*, když zadavatel jednal s náležitou péčí, nastavil původní záměr jednoznačným a srozumitelným cílem, kterým bylo zachovat úroveň prvého podlaží pro parkování, leč výsledky průzkumů provedených zhotovitelem v rámci projekční fáze díla ukázaly rizika v proveditelnosti záměru jak z hledisek stavebních, statických a bezpečnostních a ve výsledku i finančních, přičemž při docílení připravenosti bourané plochy objektu kina na stavbu budoucího parkovacího domu se již v projekční fázi ukázalo, že je vhodnější podstoupit zbourání celého domu do úrovně suterénu namísto původní volby zachovat prvé podlaží; zachování původního prvého podlaží by vyžadovalo  posilování konstrukcí stávající bourané budovy v úrovni od suterénu po prvé podlaží,  ačkoliv je v budoucnu zvažováno vybudovat parkovací dům, což by ve výsledku znamenalo, že nově zbudované konstrukce by v budoucnu byly stejně odstraňovány. 

*Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 92. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 16.12.2025.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.
5.	Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.

           

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku			                               Ve Frýdku-Místku

_____________________________			__________________________
Petr Korč	                                                                 Ing. Matouš Hába                                             	          
primátor                                                                      člen představenstva